특수공시

① 성남시의료원 설립

② 도촌종합사회복지관 건립

③ 시립보육시설 대폭 확충

④ 공영주차장 확충

⑤ 탄천 생태하천 복원사업

성남시의료원 설립

2013년 성남시 지방재정공시

	목 적
○ 수정․중원구 지역의 종합병원 이전 및 폐업에 따른 지역주민의 의료불편을 해소하고 양질의 의료서비스를 제공하기 위함

사업개요

○ 사업기간 : 2006.  3. ~ 2017.  4 (총 공사기간 40개월)

○ 위    치 : 성남시 수정구 수정로 171번길 10(태평동, 3309번지)

○ 규    모 : 501병상(지하 4층 / 지상 11층) / 연면적 81,510㎡

○ 토지면적 : 24,829.5㎡

○ 총사업비 : 193,134백만원(전액 시비)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2011년	2012년	2013년이후
계 (집행액)	193,134 (1,025)	0 (0)	4,599 (501)	10,095 (524)	178,440
국 비	0	0	0
시 비	193,134	0	4,599	10,095	178,440
도 비	0	0	0	0

’12년까지 추진실적

○ 2010.  7.  5. : 성남시 의료원 조기건립 방침 결정

○ 2012.  2. 23. : 건립부지 구시청사 철거 완료

○ 2012. 12. 14. : 입찰안내서 변경(2차) 심의

○ 2012. 12. 28. : 성남시 의료원 건립 공사 발주

향후 추진계획

○ 2013.  8월 : 기본설계 평가회

○ 2013.  9월 : 개찰 및 실시설계 적격자(시공사)선정

○ 2013.  9월 : 건축위원회 및 경관위원회 심의

○ 2013. 11월 : 건축협의 및 착공

○ 2014.  4월 : 실시설계 완료 및 심의

○ 2017.  4월 : 의료원 준공예정

○ 2017.  7월 : 의료원 개원

기대효과

○ 성남시 본시가지 의료공백으로 인한 불편 해소

○ 지역사회 공공의료 거점 구축으로 양질의 의료서비스 제공

관련사진 첨부

[ 현장전경 ]		[ 조 감 도 ]

(담당부서 보건위생과  담당 의료원건립팀  담당자 신진규 ☎ 729-3643)

도촌종합사회복지관 건립

	목 적
○ 도촌지구 입주민들의 삶의 질 향상 및 복지수요 충족을 위한 종합사회복지관을 건립하여 지역주민의 복지증진에 기여하고자함

사업개요

○ 위    치 : 중원구 도촌동 647번지

○ 사 업 량 : 지하 2층, 지상 4층

∙ 부지면적 1,631.9㎡, 건축면적 976.29㎡, 건축연면적 5,521.76㎡

○ 사업기간 : 2007. 7월 ~ 2014. 2월

○ 소요예산 : 16,144백만원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국 비	도 비	시 비	기 타	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 이후
16,144		2,000	14,144		2,274	-	-	2,307	11,559	4

’12년까지 추진실적

○ 2007.  7. : 건립 계획수립

○ 2007. 10. : 지방재정 투.융자 심사

○ 2009.  5. : 설계용역 착수

○ 2010.  2. : 설계용역 준공

○ 2010.  6. : 일상감사 완료

○ 2011. 12. : 공사계약 및 착공

○ 2012. 6. : 공사 재착공

향후 추진계획

○ 2014.  2. : 공사 준공

기대효과

○ 종합적인 복지서비스 제공으로 입주민들의 삶의 질 향상

○ 삶의 질 향상에 따른 시민이 행복한 성남 구현

관련사진 첨부

[ 위치도 ]		[ 현장사진 ]

(담당부서 사회복지과  복지기획팀  담당자  노석문 ☎ 729-2832)

시립보육시설 대폭 확충

	목 적
○ 여성의 경제활동 증가로 양질의 보육서비스에 대한 시민들의 기대와 출산 장려정책에 부응코자 어린이집을 지속적으로 확충하여 영유아의 건전한 육성을 통해 보호자의 경제적⋅사회적 활동을 지원하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2011년∼2014년

○ 사 업 량 : 23개소

∙ 진행사항 : 완  료 7개소,  추진중 16개소

∙ 구별현황 : 수정구 1, 중원구 7, 분당구 15개소

∙ 연도별 계획 : 2014년 7개소, 2015년 이후 9개소 개원예정

○ 사업성격 : 계속사업

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2011년	2012년	2013년이후
계 (집행액)	48,489 (14,673)	0 (0)	12,721 (12,721)	1,952 (1,952)	33,816
국 비	1,285	0	0,000	0	2,428
시 비	45,291	0	0,000	1,952	29,674
도 비	1,913	0	0,000	0	1,714

’13년까지 추진실적

○ 2011. 3.21 : 판교 어린이집 개원

○ 2011. 7. 1 : 봇들제2 어린이집 개원

○ 2011. 9. 1 : 한마음 복지관 어린이집 개원

○ 2012. 3.12 : 판교제2 어린이집 개원

○ 2013. 3.   : 보통골, 산업단지, 여수센트레빌 개원(3개소)

향후 추진계획

구분	명칭	위 치	규모(㎡)	사업비	정원	추진상황
추진중	소계	16개소		28,848	1,583
	산성	산성동 산6 (양지베드민터장 내)	612	복지관 예산에 포함	85	▪2012.12월 : 설계변경용역 준공 ▪2014. 7월 : 준공예정
	중앙	중앙동 709 (재개발구역 내)	2,250	·전 체: 7,960 ·기투자: 5,611 ·2013년: 2,349	130	▪2013. 2월 : 공사착공 ▪2014. 3월 : 개원예정
	여수동	여수지구단위구역 I2 (어린이종합센터내)	750	종합센터 예산에 포함	100	▪행정절차 완료 ▪2014 : 본예산 수립 ▪2015.12 : 준공예정
	성남	성남동 3644	333	1,568	70	▪2013. 8월 : 실시설계중 ▪2014. 3월 : 개원예정
	도촌	도촌동647 (종합복지관 내)	453	복지관예산에포함	78	▪2010. 2월 : 설계용역 준공 ▪2014. 6월 : 개원예정
	수내	수내동12-3	2,464	·전 체: 6,078 ·기투자: 640 ·2013년: 5,438	140	▪2010. 9월 : 공사중지 ▪2013. 3월 : 재착공 ▪2014. 3월 : 개원예정
	야탑	야탑동195	2,016	기업투자	140	▪산업진흥재단 주관 기업투자 유치중(기업건축후 기부채납) ▪2014년 : 개원예정(기업유치시)
	구미	구미동 119 (하얀마을 복지관내)	370	복지관 예산에 포함	68	▪2013. 8월 : 설계용역 준공 ▪2015. 2월 : 준공예정
	판 교 복지관	판교동 628 (종합복지관 내)	300	복지관 예산에 포함	50	▪2013. 5월 : 설계용역 준공 ▪2015. 5월 : 준공예정
	백현제1	백현동553	246	90	57	▪2010. 4월 : 협약 체결 ▪2014. 3월 : 개원예정
	백현제2	백현동546	195	90	45	▪2010. 4월 : 협약 체결 ▪개원 시기 미정
	이매제1	이매동 107	1,940	4,319	130	▪2013. 7월 : 설계비 확보(3추) ▪2015. 3월 : 개원예정
	이매제2	이매동 321	654	군부대예산으로 건축	80	▪2013. 3월 : 군부대 협력 어린이집 설치계획 (건축: 군부대, 운영: 성남시) ▪2015. 3월 :개원예정
	정자	정자동 52	1,000	민자로 건축	120	▪2013. 8월 : 민자 유치 ▪2014. 3월 : 개원예정
	서현제2	서현동 295	2,120	4,720	140	▪2013. 6월 : 설계비 확보(2추) ▪2015. 3월 : 개원예정
	판 교 테크노	삼평동 667 판교테크노 공원	1,800	4,023	150	▪2013. 7월 : 설계비 확보(3추) ▪2013. 8월 : 민자 지원 신청

기대효과

○ 국·공립 어린이집의 대기수요 해소 및 수준 높은 공보육서비스 제공

○ 보호자의 경제적․사회적 활동 지원으로 가정 복지 증진

공영주차장 확충

	목 적
주차난이 심각한 지역을 중심으로 공영주차장 지속적 확충과 주택가내 소규모 주차장 적극 발굴 조성으로 시민의 주차불편을 해소하고자함

사업개요

○  사업기간 : 2010. ~ 2015.

○  위    치 : 성남시 중원구 상대원1동 152-1번지 등 27개소

○  총사업비 : 230,811억원(시비 230,811억원)

○  사업내용

- 주차장 건립 9개소(건물식 7개소, 지평식 2개소), 토지매입 17필지

- 주차실태 조사용역 1개소

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계 (집행액)	230,811 (65,801)	65,306 (65,306)	22,642 (495)	16,585	126,278
국 비
시 비	230,811	65,306	22,642	16,585	126,278
도 비

’13년까지 추진실적

○ 야탑동 385번지 공영주차장 준공 : ’02. 1월

○ 서현동 332번지 공영주차장 준공 : ’13. 1월

○ 산성동 6번지 환승주차장 준공 : ’13. 6월

○ 양지동 865번지 공영주차장 준공 : ’13. 7월

○ 상대원 152-1번지 공영주차장 착공 : ’13. 3월

○ 복정동 688번지 공영주차장 착공 : ’13. 3월

○ 백현동 563번지 토지매입완료 : ’13. 4월

향후 추진계획

○ 상대원 152-1번지 공영주차장 준공 : ’15. 3월

○ 복정동 688번지 공영주차장 준공 : ’13. 5월

기대효과

○ 주차장 확충으로 시민의 주차불편 해소

관련사진 첨부

[ 조 감 도 ]		[ 완료전경 ]

(담당부서 교통기획과  주차관리팀  담당자 김남원 ☎ 729-3682)

탄천 생태하천 복원사업

	목 적
○ 탄천 우수관에서 오수 유입 차단시설을 철치하여 탄천 수질을 개선하고, 보 개량, 수변․수생식물 식재, 자연형 호안 조성 등 친환경적으로 하천 수생태계를 복원하고자함.

사업개요

○ 사업기간 : 2011. 4. ~ 2014. 6.

○ 위    치 : 성남 탄천(용인시계 ~ 서울시계)

○ 총사업비 : 5,150백만원(국비 70%,  도비 15%,  시비 15%).

○ 사업기간 : 2011. 4. ~ 2014. 6.

○ 사업내용 : 오수유칩 차단 35개소, 보 개량 9개소, 생태 호안 정비 2.59km 등

연도별 투자계획                                   (단위: 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2011년	2012년	2013년이후
계 (집행액)	5,150 (65)	-	732 (0)	714 (65)	3,704
국 비	3,605	-	513	500	2,592
시 비	772	-	109	107	556
도 비	773	-	110	107	556

'12년까지 추진실적

○ 탄천 생태하천 복원사업 계획 승인(환경부) : ’11년 12월

○ 기본 및 실시설계 용역 : ’12년 2월

○ 환경부 기술검토 및 경기도 생태하천 심의 의뢰 : ’12년 8월

○ 설계자문 의뢰(성남시 설계자문위원회) : ’12년 11월

'향후 추진계획

○ 공사 착공 : ’13년 8월

○ 공사 준공 : ’14년 6월

※ 국․도비 지원에 따라 사업 시행

기대효과

○ 수질 및 수생태계 복원을 통해 주민들에게 쾌적한 하천 환경 제공

관련사진

◦ 위치 : 야탑천 직상류		◦ 위치 : 야탑천 사송교 상류
◦ 사업내용 : 오수유입차단		◦ 사업내용 : 고정보 개량
◦ 위치 : 둔전교 하류		◦ 위치 : 오리교 하류
◦ 사업내용 : 생태호안조성		◦ 사업내용 : 징검여울 정비

(담당부서  하천관리과  담당  하천관리팀  이대원  ☎ 729-3582)