정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	노인복지과	②담당자 (전화번호)	노인복지과장 조수희 (031-729-2470) 시설8급 손주용 (031-729-2903)
③정책사업명	판교노인종합복지관 건립
④선정기준	판교지구 내 노인종합복지시설 건립 추진	⑤사업기간	2007.7.~2017.3.
⑥주요내용	○ 사업목적 : 판교지구 내 노인복지시설을 건립하여, 노인들의 사회교육 프로그램을 통한 건강한 심신기능 유지와 지역사회 참여를 유도하여 노인복지 증진 ○ 위 치 : 분당구 백현동 528번지 ○ 사업기간 : 2007. 7. ~ 2017. 3. ○ 사업규모 : 대지면적 6,612㎡ / 연면적 11,560㎡ / 지하2층~지상4층 ○ 주요시설 : 체육시설(수영, 헬스, 에어로빅, 탁구, 당구, 골프), 식당, 예능교육실, 도서실, 이미용실, 강당, 공동작업장 등 ○ 사업예산 : 42,132백만원 - 토지매입비 14,765, 설계비 713, 시설비 25,223, 감리비 1,369, 부대비 62 ○ 주요 추진경과 - 2007. 7. 3 : 건립계획 수립 - 2009. 10. 26 : 설계용역 착수 - 2012. 1. 3 : 설계용역 준공 - 2013. 9. 2 : 착공 - 2013. 12. 11 : 공사 중지 (가처분소송 관련) - 2014. 12. 12 : 공사 재개 ※ 현 공정률 : 85% ○ 향후계획 - 2017. 3월 : 준공