[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016 - 14

담당부서

작성자

교육문화환경국 - 교육청소년과

(최은수/729-3033/

eunsuleo@korea.kr)

정 책 명

야탑청소년수련관 건립

사업개요

○ 추진배경

- 야탑․이매․도촌 일원의 청소년들에게 다양하고 쾌적한 청소년 문화체험 공간을 제공하여 건전한 청소년 문화를 육성

○ 추진기간 : 2013년 ~ 2019년

○ 총사업비 : 44,350백만원

○ 주요내용

- 사업위치 : 성남시 분당구 야탑동 262번지

- 사업기간 :  2013년 ～ 2019년(6년)

- 사 업 량

∙ 대지면적 : 4,040.3㎡(대지, 시유지)

∙ 연 면 적 : 14,258.5㎡(지하2층, 지상6층)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 8급 최은수

- 최종 결재자 : 성남시장 이재명

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	박창훈	지방서기관	16.11.1~현재	국 업무총괄
국장	이정도	지방서기관	16.5.1~16.11.1	“
국장	권석필	지방서기관	14.4.1~16.5.1	“
국장	박상복	지방서기관	13.5.3~14.4.1.	“
과장	신경순	지방사무관	14.4.1~현재	과 업무총괄
과장	박재양	지방사무관	12.11.2~14.4.1	“
팀장	박관수	행정6급	15.11.2~현재	청소년사업 운영
팀장	천지열	행정6급	14.11.3~15.11.2	“
팀장	엄기소	행정6급	13.5.3~14.11	“
팀장	박명양	행정6급	12.11.2~13.5.2	“
담당	최은수	시설8급	15.11.2~현재	청소년수련시설 건립
담당	임준우	시설8급	12.0.12~15.11.2	“

다른기관 또는

민간인 관련자

설계용역 수행자 : (주) 행림 종합건축사사무소

추진경과

및 실적

□ 추진사항

○ 2013.  4. 11 : 야탑청소년수련관 건립(변경)계획 수립

○ 2013.  4. 26 : 중기지방재정 및 투·융자 심사 반영 완료

○ 2013.  6. 18 : 야탑청소년수련관 건립 설계용역 발주 추진계획

수립 및 추진부서 지정(도시개발사업단 시설공사과)

○ 2013.  9.  2 : 건립부지 지구단위계획 변경검토보고(수련시설+노유자시설)

○ 2013. 12. 26. : 기본 및 실시설계용역 계약(용역비:900,345천원) 및 착수

○ 2014. 05. 09. : 기본 및 실시설계용역 (1차)일시 중지

- 심의 완료 : 공공디자인·경관 심의(06. 19.), 건축심의(06. 25.)

○ 2014. 12. 23. : 기본 및 실시설계용역 중간설계 완료

- 도면, 내역서,(외·내부) 색채계획서, 지반조사 및 측량보고서, 조감도 등

○ 2014. 12. 30. : 주민설명회 2차 추진완료

○ 2014. 12. 31. : 2015년 공사비 반영(5,000백만원)

○ 2015. 01. 12. : 기본 및 실시설계용역 (2차)일시 중지 요청(시설공사과)

- 사유 : 설계의 경제성 검토(VE), 건축협의 및 공사원가의 사전검토                 (조달청) 등 각종 행정절차 이행

- 용역기간 : (당초)2013.12.26 ~ 2014.06.23 → (변경)2013.12.26 ~ 2015.06.23

○ 2015. 02. 27. : 기본설계 경제성(VE) 검토완료

○ 2015. 04. 09. : 매화마을 건영빌라 입주자 대표회의 설계변경 요청

- 차량진출입구 변경 요청

○ 2015. 04. 16. : 현장방문 및 설명

- 차량진출입구 변경 어려움

○ 2015. 06. 11. : 차량진입부 설계변경 요구 관련 검토보고 완료(업무보고)

- 차량진출입구를 현 설계대로 추진

○ 2015. 07. 07. : 실시설계 경제성(VE) 검토완료

○ 2015. 07. 07. : 2회추경 확보(506,357천원)

- 설계용역 미지급분 예산확보 : 450,173천원

- 인증관련 예산 확보 : 56,184천원

○ 2015. 07. 16. : (실시설계)설계자문위원회 심의 완료

○ 2015. 07. 27. : 건축협의 신청

○ 2015. 08. 12. : 실시설계 중 사업비 증가에 따른 검토보고

○ 2015. 09. 01. : 현장방문 및 설명

○ 2015. 09. 14. : 투자 (재)심사 요청

○ 2015. 10. 05. : 건축협의 완료

○ 2015. 10. 30. : 계약심의 안건 제출

○ 2015. 11. 10. : 투자심사위원회 개최(심사결과 : 적정)

○ 2015. 12. 22. : 계약심의 완료(원안가결)

○ 2016. 03. 29. : 계약심사 완료

○ 2016. 06. 01. : 계약의뢰 반려(조달청) 후 자체발주 추진

○ 2016. 06. 13. : 대형공사 투입사업 재조정에 따른 발주 보류(회계과)

□ 향후계획

○ 2017. : 공사 및 감리용역 계약 및 착공

○ 2019. : 공사준공