【 진행중인 사업 】

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	교육문화환경국 체육진흥과	②담당자 (전화번호)	이대원 (729-3052)
③정책사업명	성남종합스포츠센터 건립공사
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤사업기간	2010.6~2017.7
⑥주요내용	○ 추진배경 - 운영의 효율성이 떨어지는 노후된 인라인 스케이트장 부지에 종합스포츠센터를 건립하여 기존・신시가지의 체육시설 균형발전과 엘리트・생활체육의 활성화 및 체육발전 기대 ○ 추진기간 : 2010. 6. ~ 2016. 12. ○ 총사업비 : 79,955백만원 ○ 사업규모 - 지하3층/지상7층 (연면적 33,471.92㎡) - 체육시설 : 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 골프연습장, 인공암벽장, 라켓볼장, 에어로비장 등 - 기타시설 : 문화교실, 사무실, 직장운동부 숙소, 회의실 등 ○ 추진상황 및 계획 - 2007. 5. 14. : 복합체육회관 건립공사 계획수립 - 2009. 1 .3. : 타당성 조사 용역 완료 - 2009. 10. 20. : 지방재정 투・융자 심사 - 2010. 6. 24. ~ 2012. 2. 20. : 기본 및 실시설계 - 2012. 1. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 - 2012. 12. 20. : 공사 착공 - 2016. 9. : 마감공사 추진 중(현공정 92%) - 2016. 12. : 공사 준공