【 진행중인 사업 】

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	교육문화환경국 체육진흥과	②담당자 (전화번호)	이대원 (729-3052)
③정책사업명	상대원 폐기물매립장 체육시설 조성공사
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤사업기간	2015.10~2017.7
⑥주요내용	○ 추진배경 - 사용 종료된 상대원 폐기물매립장에 풋살장 및 운동기구 등을 설치하여 유소년 축구 활성화 및 시민건강 증진에 기여 ○ 추진기간 : 2015. 10. ~ 2017. 4. ○ 총사업비 : 1,866백만원 ○ 사업규모 - 유소년축구장 1면, 풋살장 1면, 야외운동기구, 관리동 등 ○ 추진상황 및 계획 - 2015. 6. 12. : 상대원 폐기물매립장 체육시설 조성계획 수립 - 2015. 9. 24. : 공유재산관리계획 심의 - 2015. 10. 14. : 공유재산관리계획 의결 - 2015. 10. 26. : 실시설계 용역 착수 - 2016. 4. 21. : 소규모환경영향평가 - 2016. 5. 10. : 성남시 기술자문 - 2016. 6. ~ 9. : 개발제한구역 관리계획 변경 - 2016. 10. : 경기도 계약심사, 공사발주 - 2016. 11. ~ 2017. 4. : 공사시행 - 2017. 5. : 시설 개장