[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016 - 27

담당부서

작성자

행복도시창조단 / 전통시장현대화과

김지훈/729-8964/nbw@korea.kr

정 책 명

중앙 공설시장 건립

사업개요

□ 공설시장 신축

○ 사업기간 : 2013 ∼ 2019년

○ 위    치 : 수정구 태평동 3681번지외 2필지

○ 부지면적 : 3,519.4㎡

○ 사업규모 : 지하1층/지상7층(연면적 22.086㎡)

○ 주요시설 : 점포, 창고, 주차장

□ 총사업비 : 44,820백만원

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 6급 유호진

- 최종 결재자 : 성남시장 이재명

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)
국장	윤학상	행정4급	2014.11.03 ~ 2015.04.30	국업무 총괄
	박세종	행정4급	2015.05.01 ~ 2015.11.01
	한송섭	행정4급	2015.11.02 ~ 현재
과장	임승민	행정5급	2012.11.01 ~ 2013.10.31	과업무 총괄
	오종호	행정5급	2013.11.01 ~ 2015.04.30
	최현철	행정5급	2015.05.01 ~ 2016.05.01
	김국봉	행정5급	2016.05.02 ~ 현재
팀장	김장수	행정5급	2012.05.02 ~ 2013.11.03	팀업무 총괄
	박광호	행정6급	2013.11.04 ~ 2015.11.01
	민경두	시설6급	2015.11.02 ~ 2015.11.10
	민병태	시설6급	2015.11.11 ~ 현재
담당	유호진	시설6급	2012.05.02 ~ 2015.11.01	시설현대화사업 추진
	노병완	시설7급	2015.11.02 ~ 현재

다른기관 또는

민간인 관련자

추진경과

및 실적

- 2014.  7.  1 : 중앙시장 재도약 위한 업무협약 체결(시‧도‧중소기업청)

- 2014. 10. 28 : 지방재정 중앙 투융자사업 심사

- 2014. 11.  4 : 시책추진보전금(1,847백만원) 교부(경기도→ 성남시)

- 2014. 12.  1 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

- 2014. 12. 19 : 공유재산 관리계획 시의회 의결

- 2015.  3. 16 : 설계단계 건설사업관리용역 착수

- 2015.  8. 21 : 건축설계공모 공고

- 2015. 12. 10 : 기본 및 실시설계용역 착수

- 2016.  4. 11 : 설계용역 일시중지

• 상인회 및 건물주간의 상가배치, 임대방식 등 이견 발생

• 중앙시장 주차공간(1~2개층 증설) 추가 확보 건의

- 2016.  8. 31 : 가동 건물 철거 완료

- 2016. 11. 17 : 성남시 공설시장 건립추진위원회 개최