정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	교통도로국 도로과	②담당자 (전화번호)	박성만(3603)
③정책사업명	분당~수서간 도시고속도로 소음저감시설 설치공사
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 건설사업	⑤사업기간	2015.7~2019.2
⑥주요내용	○ 추진배경 분당∼수서간 도시고속도로에 소음저감 시설을 설치함으로써 교통소음 등 지역주민들의 피해 요인을 해소하고 쾌적한 주거환경을 조성 ○ 위 치 : 분당수서로(매송 ∼ 벌말 지하차도간) ○ 사 업 량 : L=1.9km, B=30m(6차로) ○ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년 ○ 소요예산 : 155,158백만원 ○ 추진경과 - 2013. 09. 30 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2013. 12. 10 : 시민 참여평가단 평가 개최 - 2013. 12. 13 : 전문가 평가 및 공법선정 - 2014. 01. 16 : 설계자문위원회 개최(조건부 채택) - 2014. 01. 17 : 디자인 및 경관심의 개최(조건부 승인) - 2014. 02. 13 : 설계VE 용역 준공 - 2014. 03. 25 : 주민제안의 날 개최(지하차도 구간 전면공원화 요구) - 2014. 10. 17 : 지하차도 U-타입구간 연구용역 완료(대한토목학회) - 2014. 11. 12~14 : 주민설명회 개최(6회) - 2014. 12. 29 : 실시설계용역 준공 - 2015. 03. 09 : 조달청 공사발주 의뢰 - 2015. 07. 20 : 계약체결 - 2015. 07. 24 : 공사착공