[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016 - 38

담당부서

작성자

(수정구보건소/보건행정과)

(권혜진/3833)

정 책 명

수정구보건소 건립

사업개요

및

추진경과

<사업개요>

○ 공사기간 : 2008. 8. ~ 2016. 2.

○ 사 업 비 : 39,145백만원

○ 신축장소 : 수정구 수정로 218(신흥3동 3435)

<추진경과>

○ 2008. 02. 14 : 청사신축 이전 방침 결정

○ 2009. 06. 30 : 보건소 건립에 따른 타당성 조사 용역 준공

○ 2010. 07. 19 : 대형공사 입찰방법(일괄) 심의결과 통보                                         (경기도→성남시)

○ 2010. 10 ~ 11 : 중기지방재정계획, 투자심사, 공유재산관리계획 심의

○ 2011. 03. 18 : 기본계획 및 입찰안내서 경기도 기술심의

○ 2011. 03. 31 : 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 준공

○ 2012. 06. 05 : 2012년 제2회 추경예산 확보(3,839백만원)

○ 2013. 02. 06 : 2013년 제1차 투융자사업 자체 재심사 (적정)

○ 2013. 03. 15 : 2013년 제1회 추경예산 확보 (3,242백만원)

○ 2013. 04. 10 : 입찰안내서 변경분 경기도 지방건설기술재심의

(경기도)

○ 2013. 06. 18 : 입찰 결과 3개사 신청

[(주)한화건설, (주)신동아건설, (주)KCC건설]

○ 2013. 07. 02 : 현장설명회

※ 기본설계기간 : 현장설명일로부터 90일 (7. 2 ~ 9. 30)

○ 2013. 11. 01 : 기본설계 평가회 개최

○ 2013. 11. 11 : 실시설계 적격자 선정(신동아건설 컨소시엄)

○ 2013. 12. 26 : 주민설명회 개최

○ 2013. 12. 26 : 전면책임감리 용역계약

(정림건축종합건축사사무소)

○ 2013. 12. 31 : 신동아 건설 우선시공분 계약(3,550백만원)

○ 2014. 01. 22 : 건축(교통, 굴착)위원회 심의

○ 2014. 02. 05 : 도시계획위원회 심의

○ 2014. 02. 17 : 도시관리계획(주차장) 결정(폐지) 고시

○ 2014. 02. 19 : 기공식 개최

○ 2014. 03. 05 : 건축 허가

○ 2014. 03. 10 : 우선시공분 착공(건물철거, 터파기 등)

○ 2014. 04. 29 : 경기도 기술심의(실시설계평가회)

○ 2014. 06. 07 : 우선시공분 준공

○ 2014. 06. 26 : 2차 공사(본공사 1차) 착공

○ 2014. 10. 31 : 전면책임감리 변경계약(737백만원)

○ 2015. 02. 10 : 2차 공사(본공사 1차) 준공

○ 2015. 02. 11 : 3차 공사(본공사 2차) 착공

○ 2015. 08. 31 : 3차 공사(본공사 2차) 준공

○ 2015. 09. 01 : 4차 공사(본공사 3차) 착공

○ 2016. 01. 15 : 4차 공사(본공사 3차) 준공

○ 2016. 01. 16 : 5차 공사(본공사 4차) 착공

○ 2016. 02. 25 : 5차 공사(본공사 4차) 준공

○ 2016. 03. 12 ~ 03. 13 : 신청사 이전

○ 2016. 03. 14 : 보건소 업무개시

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 주무관 신동복

- 최종 결재자 : 성남시장 이대엽

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
실·국장	김은미	서기관	‘16.03.07 ~	보건소 총괄
〃	최대식	〃	‘13.05.02～’15.12.16	〃
〃	구성수	〃	‘12.05.02～’13.05.01	〃
〃	이형선	〃	‘11.05.02～’12.05.01	〃
〃	최대식	〃	‘10.08.03～’11.05.01	〃
〃	박영숙	〃	‘09.05.02～’10.08.02	〃
〃	이형선	〃	‘08.06.05～’09.05.01	〃
과장	이종준	행정5급	‘13.05.02～	보건행정과 총괄
〃	심변섭	〃	‘12.08.18～’13.05.01	〃
〃	김경옥	〃	‘11.05.02～’12.08.17	〃
〃	김영자	〃	‘10.07.19～’11.05.01	〃
〃	전형조	〃	‘09.10.05～’10.07.18	〃
〃	이강진	〃	‘09.02.27～’09.10.04	〃
팀장	진명호	행정6급	‘13.05.02～	보건행정팀 업무
〃	권미순	〃	‘12.11.05∼‘13.05.01	〃
〃	최광수	〃	‘10.07.19～’12.11.04	〃
〃	김기영	〃	‘10.04.13∼’10.07.18	〃
〃	김영택	〃	‘09.07.29～’10.04.12	〃
〃	송영섭	〃	‘07.04.02～’09.07.28	〃

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

담당	권혜진	행정7급	‘16.05.02 ~	청사건립
〃	김효선	〃	‘15.05.01～’16.05.01	〃
〃	허선미	〃	‘14.11.04～’15.04.30	〃
〃	양승석	〃	‘13.11.04～’14.11.03	〃
〃	홍종희	〃	‘13.05.02～’13.11.03	〃
〃	최나은	〃	‘10.06.01～’13.05.01	〃
〃	김경환	〃	‘10.03.08～’10.05.30	〃
〃	한영길	〃	’09.10.12～‘10.03.07	〃
〃	신성모	〃	‘09.07.29～’09.10.11	〃
〃	김양기	〃	’09.06.17～’09.07.28	〃
〃	이종락	〃	‘09.05.04～’09.06.16	〃

※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재

다른기관 또는 민간인 관련자	신동아건설(주)
추진실적	○ 공사완료