【 진행중인 사업 】

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	청소행정과	②담당자 (전화번호)	하홍열 주무관 (729-3232) 오재곤 과장 (729-2630)
③정책사업명	600톤 소각장 대체처리시설 건립
④선정기준	대규모 재원이 소요되는 사업	⑤사업기간	2010 ~ 2021
⑥주요내용	○ 추진배경 • 환경에너지시설 600톤 소각장은 1998년 가동을 시작하여 현재까지 운영 중으로, 시설 노후화에 따른 유지관리비용 상승과 환경성, 안정성 문제로 효율적인 운영을 위하여 대체시설 건립을 추진함. ○ 개 요 • 위 치 : 성남시 중원구 둔촌대로 567 (현 소각시설 부지내) • 면 적 : 361,587㎡ (도시계획시설결정) • 시설용량 : 600톤/일 (300톤/일×2기) • 투자방식 : 민간투자방식 • 소요예산 : 1,162억(소각시설 대보수-1,116억, 발전시설-46억) • 추진기간 : 2010 ~ 2021 ○ 그동안 추진사항 • 2009. 07. 27 : 기본계획용역 및 입찰안내서작성 용역 발주 • 2009. 11. 02 : 중기지방재정계획수립 • 2010. 05. 04 : 재정 투․융자심사(행정안전부) • 2010. 11. 01 : 주민공청회 개최 • 2010. 12. 01 : 주민설명회 개최 • 2011. 03. 17 : 전문가 간담회 개최(1차) • 2011. 12. 23 : 600톤 소각장 기술진단용역 착수 • 2012. 04. 16 : 전문가 간담회 개최(2차) • 2012. 04. 25 : 환경단체 설명회 개최 • 2012. 07. 02 : 중간보고회 개최(기술진단) • 2012. 09. 17 : 최종보고회 개최(기술진단)

⑥주요내용

•  2013. 01. 18 : 환경단체 및 보통골 주민설명회 개최(기술진단)

•  2013. 05. 28 : 해외 선진시설 자료조사(일본, 호주)

•  2013. 08. 23 : 국고보조금 지원 관련 업무협의(환경부)

•  2013. 11. 08 : 국고보조금 지원 관련 업무협의(한국환경공단)

•  2013. 11. 29 : 국비지원 사전검토요청서 제출(1차) (환경부)

•  2013. 12. 05 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2014. 02. 26 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2014. 02. 27 : 국고지원 관련 업무협의(한국환경공단)

•  2014. 04. 11 : 국비지원 사전검토 결과 회신(1차), (환경부)

•  2014. 09. 19 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2014. 12. 18 : 국비지원 사전검토요청서 재 제출(2차), (환경부)

•  2015. 03. 18 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2015. 04. 27 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2015. 05. 26 : 국비지원 사전검토 결과 회신(2차), (환경부)

•  2015. 06. 05 : 경제성분석을 위한 고등기술연구원 출장

•  2015. 06. 09 : 성남 폐기물처리시설 경제성분석 결과 회신

•  2016. 02. 01 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2016. 06. 23 : 신규 및 대보수 기간 생활폐기물 매립 가능여부

업무협의 (수도권매립지관리공사)

•  2013. 11. 29 : 국비지원 사전검토요청서 제출(1차) (환경부)

•  2013. 12. 05 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2014. 02. 26 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2014. 02. 27 : 국고지원 관련 업무협의(한국환경공단)

•  2014. 04. 11 : 국비지원 사전검토 결과 회신(1차), (환경부)

•  2014. 09. 19 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2014. 12. 18 : 국비지원 사전검토요청서 재 제출(2차), (환경부)

•  2015. 03. 18 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2015. 04. 27 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2015. 05. 26 : 국비지원 사전검토 결과 회신(2차), (환경부)

•  2015. 06. 05 : 경제성분석을 위한 고등기술연구원 출장

•  2015. 06. 09 : 성남 폐기물처리시설 경제성분석 결과 회신

•  2016. 02. 01 : 국고지원 관련 업무협의(환경부)

•  2016. 06. 23 : 신규 및 대보수 기간 생활폐기물 매립 가능여부

업무협의 (수도권매립지관리공사)

•  2016. 10. 26 : 600톤소각장 대체시설건립 추진현황 보고

⑥주요내용	• 2016. 10. 27 : 민간투자사업 사업제안서 제출(포스코건설) • 2016. 11. 22 : 민간투자사업 사업제안서 철회(포스코건설) • 2016. 11. 23 : 민간투자사업 사업제안서 제출(GS건설) • 2016. 12. 20 : 민간투자사업 사업제안서 검토결과 회신 (사업제안서 보완)