【 완료된 사업 】

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016-42

담당부서

작성자

(푸른도시사업소/하천관리과)

(최영민/031-729-3583)

정 책 명

여수천 유지용수 확보사업

사업개요

○ 추진배경

- 탄천의 주요 지천인 여수천에 대해 깨끗한 물이 흐르는 하천으로 복원하여 갈수시 건천화를 예방하고 수생태계 건강성 회복.

○ 추진기간 : 2011. 4. ~ 2016. 12.

○ 총사업비 : 6,529백만원(국비 70%, 지방비 30%)

○ 주요내용

- 수질정화시설 1개소(6,900㎥/일), 유지용수관로 3.1km

- 섬말저류지 조성

추진경과 및 사업 관련자

□ 사업관련자 현황

○ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	김유근	5급	‘11. 4.~’11.10.	하천업무총괄
과장	황호양	5급	‘11.11.~’13. 5.	하천업무총괄
과장	김옥인	5급	‘13. 5.~’14.11.	하천업무총괄
과장	정장훈	5급	‘14.11.~’16.12.	하천업무총괄
팀장	정철모	6급	‘11. 4.~’12. 3.	하천업무기획
팀장	양화종	6급	‘12. 3.~’13. 5.	하천업무기획
팀장	조재식	6급	‘13. 5.~‘14. 7.	하천업무기획
팀장	김용민	6급	‘14. 7.~’15. 5.	하천업무기획
팀장	유영환	6급	‘15. 5.~’16.12.	하천업무기획
담당	박상훈	7급	‘11. 4.~’12. 5.	생태하천조성
담당	유 동	7급	‘12. 5.~’13. 5.	생태하천조성
담당	이대원	7급	‘13. 5.~‘14. 7.	생태하천조성
담당	이영관	7급	‘14. 7.~‘15.10.	생태하천조성
담당	양승선	7급	‘15.11.~’16. 5.	생태하천조성
담당	김인숙	7급	‘16. 6.~’16.10.	생태하천조성
담당	최영민	7급	‘16.11.~’16.12.	생태하천조성

○ 관련기관 및 공사관련

- 환경부 수생태보전과, 한강유역환경청 수생태관리과,

경기도 수질관리과

- 용역사 : 도화엔지니어링, 현이엔씨

- 시공사 : 남광건설(주), 낙원건설(주)

□ 추진경과 및 실적

○ 2011. 04 ~ 2013. 6. : 기본 및 실시설계 용역, 행정절차 이행

○ 2013. 08. : 경기도 계약심사

○ 2013. 10. : 공사착공

○ 2015. 09. 25 : 토목공사 준공

○ 2016. 04. 22 : 사업계획변경(섬말저류지)

○ 2016. 07. 21 : 여수천 섬말저류지 조성공사 실시설계용역 준공

○ 2016. 10. 19 : 여수천 섬말저류지 조성공사 착공

○ 2016. 12. 27 : 여수천 섬말저류지 조성공사 준공