정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시개발과	②담당자 (전화번호)	과장 김필수 담당 남정필 (729-4492)
③정책사업명	백현유원지(정자동 1번지 일원) 도시개발사업
④선정기준	-	⑤사업기간	2015. 1. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	○ 추진배경 - 장기간 미 집행된 백현유원지 부지에 지역적 특성을 고려한 컨벤션센터, 호텔 등의 MICE산업 업무복합단지를 조성하여 기업하기 좋은 성남 및 지역경제를 활성화 ○ 주요내용 - 위 치 : 성남시 분당구 정자동 1번지 일원 - 사업면적 : 206,350㎡ - 사 업 비 : 13,424백만원 ○ 주요추진상황 - 2014.02.10 : 성남도시기본계획 변경(시가화 예정지:복합용지) (구)백현유원지 부지 개발방안 연구(정책기획과) - 2014.07.24 : 백현유원지 개발을 위한 추진방안 보고 - 2015.01.08 : 타당성 조사용역 착수 - 2015.07.14 : 타당성 조사용역 준공 - 2015.09.25 : 성남도시관리계획(재정비) 결정 고시(유원지 폐지) - 2015.12.10 : 구역지정 및 개발계획 수립용역 착수 - 2016.01.05 : 업무대행을 위한 위·수탁 협약 체결 (市,성남도시개발공사) - 2016.01.22 : 착수보고회 개최 - 2016.06.29 : 중간 보고회 개최 - 2016.07.25 : 전시산업발전협의회 심의 완료(산업통상자원부) - 2016.10.06 : 토지출자를 위한 공유재산심의회 완료 ○ 추진계획 - 2017. 03. : 도시개발구역 및 개발계획 수립 고시 - 2017. 상반기 : SPC 설립 (도시개발공사) - 2017. 08. : 중앙투자심사 재상정(행정자치부) - 2017. 09~11. : 백현유원지 부지 토지현물출자(市⇒도시개발공사) - 2018. 상반기 : 공사착공

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기간 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재