정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

평생학습원 도서관지원과

②담당자

(전화번호)

행정7급 윤부연

(729-4672)

③정책사업명

서현도서관 건립

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업

⑤사업기간

2009.1.~2018.5.

⑥주요내용

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 성남시 분당구 서현동 234번지

○ 사업기간 : 2009. 1. ∼ 2018. 5.

○ 사업규모 : 지하3층/지상4층

(부지 4,222㎡, 연면적 12,599.41㎡)

○ 소요예산 : 30,532백만원

(공사비26,126 /설계비787 /감리비1,700 /시설부대비 등 1,919)

❍ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	기 투 자 (2016년까지)	2017년이후 투자
재원별	계	30,532	7,137	23,395
	국고보조금
	특별교부세
	도 비
	시책추진보전금
	시 비	30,532	7,137	23,395
용도별	설 계 비	787	787
	보 상 비	0	0
	시 설 비	26,126	5,583	20,543
	감 리 비	1,700	749	951
	시설부대비	19	18	1
	기 타	1,900		1,900

⑥주요내용

□ 그간의 추진상황

○ 2009. 01. 15 : 서현도서관 건립계획 수립

○ 2009. 02. 24 : 공유재산관리계획 심의 의결(시의회)

○ 2009. 08. 14 : 도서관 건립 타당성 조사용역 완료

○ 2014. 02. 05 : 제1회 성남시 도시계획위원회 심의

○ 2014. 02. 17 : 도시관리계획(도시계획시설 폐지(주차장))                     변경 결정 고시

○ 2014. 07. 14 : 기본조사 및 실시설계 용역 착수

○ 2014. 10. 13 : 주민설명회

○ 2015. 01. 08 : 경관 및 공공디자인심의(디자인정책과)

○ 2015. 09. 07 : 건축협의완료(건축과)

○ 2016. 03. 28 : 공사 계약심사

○ 2016. 05. 10 : 공사 착공

○ 공정률 : 12.16% (2016. 12. 31. 현재)

□ 향후 추진계획

○ 2018. 05. 09 : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도	현장사진