정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

평생학습원 도서관지원과

②담당자

(전화번호)

행정7급 윤부연

(729-4672)

③정책사업명

복정도서관 건립

④선정기준

공약사업

⑤사업기간

2009.11.~2019.3.

⑥주요내용

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 성남시 수정구 복정동 649번지

○ 사업기간 : 2009. 11. ∼ 2019. 3.

○ 사 업 량 : 지하2층/지상4층

(부지 3,313㎡, 연면적 8,579.56㎡)

○ 소요예산 : 23,500백만원

(공사비19,304 설계비829 감리비1,579 시설부대비등1,788)

❍ 사 업 비 :

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	기 투 자 (2016년까지)	2017년 투자	2018년 투자
재원별	계	23,500	4,718	7,380	11,402
	국고보조금	1,840	1,040	800
	특별교부세
	도 비
	시책추진보전금
	시 비	21,660	3,678	6,580	11,402
용도별	설 계 비	829	829
	보 상 비
	시 설 비	19,304	3,698	6,800	8,806
	감 리 비	1,579	184	560	835
	시설부대비	45	7	20	18
	기 타	1,743			1,743

⑥주요내용

□ 그간의 추진상황

○ 2009. 11. 19 : 복정도서관 건립 추진계획 수립

○ 2013. 07. 23 : 주민설명회 개최

○ 2013. 08. 10 : 타당성조사 용역 완료

○ 2013. 10. 24 : 중앙 투융자사업 심사 승인(안전행정부)

○ 2013. 11. 25 : 공유재산 관리계획 심의 의결(시의회)

○ 2014. 06. 25 : 도시관리계획 및 지구단위계획 심의의결

○ 2014. 12. 09 : 건축설계 공모

○ 2015. 04. 06 : 기본조사 및 실시설계 용역 착수

○ 2015. 07. 17 : 주민설명회

○ 2015. 11. 04 : 설계의 경제성 등 검토(VE)용역 착수

○ 2016. 03. 14 : 도시게획시설 실시계획 인가

○ 2016. 05. 11 : 건축협의

○ 2016. 06. 09 : 굴토심의

○ 2016. 12. 26 : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2016. 12.    : 공사 계약

□ 향후 추진계획

○ 2017. 03. : 공사 착공

○ 2019. 03. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도	현장사진