정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

도서관지원과

②담당자

(전화번호)

행정7급 윤부연

(729-4672)

③정책사업명

상원도서관 건립

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업

⑤사업기간

2013.4.~2017.11.

⑥주요내용

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 성남시 중원구 중앙동 712번지

○ 사업기간 : 2013. 4. ~ 2017. 11.

○ 사 업 량 : 지하2층/지상5층

(부지1,735㎡, 연면적 4,247.59㎡)

○ 소요예산 : 21,385백만원

(토지매입비8,307/공사비10,873/설계비443/감리비239/부대비등1,523)

❍ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	기 투 자 (2016년까지)	2017년 이후 투자
재원별	계	21,385	16,728	4,657
	국고보조금	1,258	558	700
	특별교부세
	도 비
	시책추진보전금
	시 비	20,127	16,170	3,957
용도별	설 계 비	443	443
	보 상 비	8,307	8,307
	시 설 비	10,873	7,716	3,157
	감 리 비	239	239
	시설부대비	23	23
	기 타	1,500		1,500

⑥주요내용

□ 그간의 추진상황

○ 2013. 04. 09 : 상원도서관 건립 계획 수립

○ 2013. 04. 26 : 지방재정 투융자사업 심사

○ 2013. 06. 07 : 공유재산관리계획 심의 의결(시의회)

○ 2013. 09. 30 : 부지매입 계약 체결(성남시 ↔ LH공사)

○ 2014. 03. 27 : 현상설계 공모 당선작 선정(시설공사과)

○ 2014. 04. 17 : 기본조사 및 실시설계용역 계약 및 착수

○ 2014. 12. 23 : 건축협의 완료(건축과)

○ 2015. 06. 12 : 계약심사 완료(감사관)

○ 2015. 07. 02 : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2015. 12. 17 : 공사 계약

○ 2016. 03. 25 : 공사 착공

○ 공정률 : 39.95%, (2016. 12. 31. 현재)

□ 향후 추진계획

○ 2017. 11. 24 : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도	현장사진