【 완료된 사업 】

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016-09

담당부서

작성자

(복지보건국/노인복지과)

(김경원/031-729-2903)

정 책 명

태평1동 복지회관 신축

사업개요

○ 사업목적 : 노인여가활동 활성화 및 건전한 노년문화를 정립하고 중장기적인 관점에서 다양한 복지서비스를 제공하는 복지회관 건립

○ 위    치 : 수정구 태평1동 5118, 5119번지

○ 사업기간 : 2013. 2. ∼ 2016. 12.

○ 사업규모 : 대지면적 527.4㎡, 연면적 2,019.8㎡, 지하1층~지상7층

○ 주요시설 : 경로식당, 프로그램실, 체력단련실, 다목적강당 등

○ 사업예산 : 5,832백만원

- 설계비 235, 공사비 5,513, 감리비 59, 부대비 15, 도시관리계획변경용역비 10

추진경과 및 사업 관련자

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 행정7급 백경자

- 최종 결재자 : 성남시장 이재명

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	김영자	5급	2013.02.~	건립계획 수립
과장	윤순영	5급	2013.05.~	설계
과장	한경순	5급	2015.05.~	설계,공사
과장	김차영	5급	2016.05.~ 2016.12.	공사
팀장	장춘호	6급	2012.05.~	설계
팀장	권규영	6급	2013.05.~	설계
팀장	박규련	6급	2014.11.~	설계,공사
팀장	이성훈	6급	2015.11.~ 2016. 12.	공사
담당	백경자	7급	2008.04.~	건립계획 수립
담당	조경수	8급	2011.05.~	설계
담당	김은혜	7급	2013.05.~	설계
담당	정득춘	7급	2014.04.~	설계
담당	김형준	7급	2014.11.~	설계,공사
담당	손주용	7급	2016.3.~ 2016.12.	공사

다른기관 또는 민간인 관련자	○ 설계용역 : ㈜정동종합건축사사무소 ○ 건축공사 : 강호종합건설(주) ○ 전기공사 : 오성전기건설(주) ○ 통신공사 : ㈜도원테크 ○ 소방공사 : 창성비케이(주) ○ 감리용역 : 건축사사무소 담우
추진경과 및 실적	○ 주요 추진경과 - 2013. 3. 26 : 건립계획 수립 - 2013. 11. 8 : 도시관리계획변경 결정 - 2014. 1. 10 : 설계용역 착수 - 2015. 2. 27 : 설계용역 준공 - 2015. 9. 23 : 착공 - 2016. 12. 29 : 준공