정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2017-18

담당부서

작성자

복지국 / 노인복지과

김경원 / 729-2903

정 책 명

판교노인종합복지관 건립(완료)

사업개요

○ 사업목적 : 판교지구 내 노인복지시설을 건립하여 노인들의 사회교육 프로그램을 통한 건강한 심신기능 유지와 지역사회 참여를 유도하여 노인복지 증진

○ 위    치 : 분당구 판교역로 99

○ 사업기간 : 2007. 07. ~ 2017. 04.

○ 사업규모 : 대지면적 6,612㎡, 연면적11,559.99㎡, 지하2층~지상4층

○ 주요시설 : 체육시설(수영, 헬스, 필라테스, 탁구, 당구, 골프), 식당, 예능교육실, 도서실, 이미용실, 강당, 공동작업장 등

○ 소요예산 : 39,919백만원

추진경과 및 사업 관련자

○ 추진경과

- 2007. 07. 03 : 건립계획 수립

- 2009. 10. 26 : 설계용역 착수

- 2012. 01. 03 : 설계용역 준공

- 2013. 03. 25 : 판교노인종합복지관 재추진 계획 수립(수영장 설치)

- 2013. 09. 02 : 공사 착공

- 2013. 12. 11 : 공사 중지(가처분 소송 관련)

- 2014. 12. 12 : 공사 재개

- 2017. 04. 17 : 공사 준공

○ 사업관련자

구 분	성 명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
노인복지과 과 장	윤순영	5급	2013.05.~	예 산
노인복지과 과 장	한경순	5급	2015.05.~	예 산
노인복지과 과 장	김차영	5급	2016.05.~	예 산
노인복지과 과 장	조수희	5급	2017.01.~2017.04.	예 산
시설공사과 과 장	우이섭	5급	2013.09.~	공 사
시설공사과 과 장	최창규	5급	2016.05.~2017.04.	공 사
노인복지과 팀 장	권규영	6급	2013.09.~	예 산
노인복지과 팀 장	박규련	6급	2014.11.~	예 산
노인복지과 팀 장	이성훈	6급	2015.11.~2017.04.	예 산
시설공사과 팀 장	민병태	6급	2013.09.~	공 사
시설공사과 팀 장	장춘호	6급	2014.07.~	공 사
시설공사과 팀 장	이종건	6급	2014.11.~2017.04.	공 사
시설공사과 담 당	최은수	8급	2012.09.~	공 사
시설공사과 담 당	이경동	8급	2014.11.~	공 사
시설공사과 담 당	강대성	7급	2016.05.~	공 사
시설공사과 담 당	도중헌	8급	2016.10.~2017.04.	공 사
노인복지과 담 당	김은혜	7급	2013.05.~	예 산
노인복지과 담 당	정득춘	7급	2014.04.~	예 산
노인복지과 담 당	김형준	7급	2014.11.~	예 산
노인복지과 담 당	손주용	7급	2016.03.~	예 산
노인복지과 담 당	김경원	8급	2017.01.~2017.04.	예 산