정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	교육문화국 교육청소년과 (2017 – 21)	담당부서 작성자	김가희 (729-3033)
정책사업명	야탑청소년수련관 건립
선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2013.4∼2019. 9
사업개요	○ 추진배경 • 야탑․이매․도촌 일원의 청소년들에게 다양하고 쾌적한 청소년 문화체험 공간을 제공하여 건전한 청소년 문화를 육성 ○ 추진기간 : 2013. 4월 ~ 2019. 9월 ○ 총사업비 : 44,350백만원 ○ 주요내용 • 사업위치 : 성남시 분당구 야탑동 262번지 • 사업기간 : 2013. 4월 ~ 2019. 9월(6년) • 사 업 량 - 대지면적 : 4,040.3㎡(대지, 시유지) - 연 면 적 : 14,258.5㎡(지하2층, 지상6층) ○ 추진상황 • 2013. 4.11 : 야탑청소년수련관 건립(변경)계획 수립 • 2013.12.26 : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 • 2015. 7.16 : (실시설계)설계자문위원회 심의 완료 • 2015.10. 5 : 건축협의 완료 • 2015.11.10 : 투자심사위원회 개최(심사결과 : 적정) • 2017. 3.21 : 공사원가 사전검토 및 조달계약체결 의뢰(조달청) • 2017. 7.17 : 공사 및 감리용역 계약 • 2017. 7.31 : 공사 착공 ○ 향후 계획 • 2019. 9월 : 공사 준공(착공 후 25개월)