정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	교육문화국 체육진흥과 (2017 – 23)	담당자 (연락처)	이기남 (729-3052)
정책사업명	성남 축구센터(클럽하우스) 건립공사
선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2016. 4 ~ 2019.10.
주요내용	○ 추진배경 • 성남 FC구단의 안정적인 훈련환경을 조성하여 경기력을 향상시키고, 이를 통해 시민과 하나되는 명문구단으로의 도약을 위해 성남 축구센터 조성 ○ 추진기간 : 2016. 4. ~ 2019. 10. ○ 총사업비 : 26,000백만원 ○ 사업규모 • 지하1층/지상3층(연면적 7,398㎡), 천연잔디축구장 2면 • 라커룸, 라운지, 숙소, 물리치료실, 체력단련실, 감독/코치실, 전력분석회의실, 식당, 샤워실, 실내연습장 등 • 구단사무실, 회의실, 관람시설, 라운지 등 • 유지관리시설 : 관리실, 기계/설비/전기실, 창고 등 ○ 추진상황 및 계획 • 2015. 4. 2. : 성남축구센터 건립 계획 수립 • 2015. 9. 25. : 도시관리계획(체육시설) 결정 • 2015. 11. 9. : 중기지방재정 • 2015. 11. 10. : 지방재정 투자심사 • 2015. 12. 15. : 잡월드 잔여부지 사용 동의(고용노동부) • 2016. 1. 21. : 공유재산 관리계획 의결 • 2016. 4. ~ 11. : 설계공모(설계자 선정) • 2016. 12. 7. ~ 2018. 2. : 기본 및 실시설계 추진 • 2018. 1. : 도시계획시설(체육시설) 실시계획인가 • 2018. 3. ~ 2019. 10. : 공사시행 • 2019. 11. : 시설 개장