정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서

재정경제국 회계과

(2018 – 26)

담당자

(연락처)

김정숙

(729-2775)

정책사업명

구 청사 및 주민센터 신축

선정기준

10억원 이상 예산이 투입되는 건설사업

사업기간

2013 ~ 2023

주요내용

○ 사업목적

• 노후 된 청사를 신축하여 지역 주민에게 양질의 행정서비스를 제공하고자 함

○ 사업개요

• 사 업 량 : 12개소

• 사업기간 : 2013 ~2022

• 사 업 비 : 337,102백만원

구 분		대지 면적	층수	연면적	사업 기간	총 사업비			현 황
						계	토지비	시설비
						337,102	151,428	185,674
일 반 지 역 (6)	태평4동	3,040	지하2/ 지상5	9,290	2014~ 2019	23,485	-	23,485	· 공사기간 :‘16. 12. ~‘19. 2. · 공정률 12%
	성남동 (이전 및 별관신축)	본관	지상2	2,100	2017	3,000	-	3,000	· 대우 오피스텔 내 ·‘17.12.23. 이전, 12.26. 개소
		별관	지하1/지상4	500	2017~ 2018	1,065	-	1,065	· `17. 2. 별관 설계용역 착수 ·‘18. 상반기 준공 예정
	분당동	1,458	지하2/ 지상3	3,600	2015~ 2019	9,005	-	9,005	·‘17. 6. : 계획 변경 (설계중) (지1→지2층, 2,300→3,600㎡)
	수내2동	750	지하2/ 지상3	2,300	2013~ 2020	5,798	-	5,798	·‘17. 12. 설계용역 발주 준비중 (시설공사과)
	정자1동	994	지하4/ 지상6	7,500	2015~ 2021	19,494	-	19,494	·‘17. 4. : 계획변경 ·‘17.11. 중기지방재정계획 반영
	이매1동	6,173	지하2/ 지상5	9,500	2015~ 2023	27,282	1,785	25,497	·‘17.11. 중기지방재정계획 반영 ·‘17.11. 신축계획 변경보고
토 지 조 성 사 업 (6)	위례동 (업무10)	1,807	지하2/ 지상4	4,700	2015~ 2019	16,744	6,190	10,554	·‘17. 10. : 토지매입 완료 ·‘17. 12. : 설계용역 준공 ·‘18. 3. : 공사 착공 예정
	고등동	2,000	지하1/ 지상3	3,500	2016~ 2020	14,492	5,846	8,646	·‘16. 3. 신축 계획 수립 ·‘17. 9. 사업비 변경보고
	신흥2동	1,050	지하1/지상4	2,900	2017~ 2022	10,758	3,659	7,099	·‘17. 9. 신축계획 수립 ·‘17.11. 중기지방재정계획 반영
	여수동 (F5)	1,660	미정	미정	2017~	4,820	4,820	-	·‘17. 1 토지매입 계약 · 행정여건에 따라 향후추진
	중원구 복합청사	8,120	미정	30,000 기준	2016~ 2022	93,156	21,125	72,031	·‘17.11. 중기지방재정계획 반영 ·‘17.11. 기본계획수립 용역 착수
	위례 업무2	31,528	미정	미정	2016~	108,003	108,003	-	·‘17.12. 택지계획변경 中 (LH) · 부지매입 후 향후 추진

○ 추진상황

※ 정자동 주민센터 부지매입은 사업취소로 인해 제외