정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	교통도로국 도로과 (2017 – 28)	② 담당자 (전화번호)		박성만 (729-3603)
③ 정책사업명	남한산성 순환도로 확장공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2009. 4. ~ 2021. 7.
⑥ 주요내용	○ 추진배경 • 위례신도시 광역교통 개선대책 사업으로 신도시 개발에 따른 교통 수요에 대처하고, 순환도로 재정비를 통하여 통과 교통을 시 외곽으로 유도하여 도심 교통 정체 해소 ○ 추진기간 : 2009. 4. 28. ~ 2021. 07. 13. ○ 총사업비 : 128,000백만원 ○ 주요내용 • 위치 : 수정구 단대동(닭죽촌) ~ 중원구 금광동 (황송터널) • 사업량 : L = 3km, B=15→30m(4→6차로) ○ 추진경과 • 2009. 04. 28. : 기본 및 실시설계용역 착수 • 2011. 12. 02. : 사전환경성검토서 공람공고 및 주민설명회 • 2012. 01. 13. : 사전환경성검토서 한강유역환경청 협의 요청 • 2012. 05. 01. : 도시관리계획시설(도로)변경 결정의뢰 • 2012. 06. 18. : 도시관리계획시설(도로)변경 공람공고 • 2012. 11. 13. : 기본 및 실시설계 완료 • 2012. 12. 13. : 성남도시계획위원회 심의 • 2013. 02. 25. : 도로구역 결정 • 2013. 02. 26. : 보상계획 공고 • 2013. 03. 27. : 사업비 부담 협약체결 • 2013. 04.∼05. : 토지(지장물 감정평가) • 2013. 08. 23. : 설계디자인 심의 • 2013. 12. 23. ~ 2014. 12. 31. : 토목공사 1차분 • 2015. 01. 01. ~ 2015. 12. 18. : 토목공사 2차분 • 2015. 12. 19. ~ 2017. 6. 30. : 토목공사 3차분 • 2017. 07. 01. ~ 2018. 06. 30. : 토목공사 4차분 ○ 향후 추진계획 • 2021. 07. 13. : 공사 준공