정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	재정경제국 시장현대화과 (2017 – 34)	담당자 (전화번호)	이춘헌 (729-8962)
정책사업명	성호공설시장 건립
선정기준	10억 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2012 ~ 2020
주요내용	○ 사업목적 • 노후된 성호시장을 공설시장으로 건립하여 소상공인 보호 및 지역경제 활성화를 도모코자 함 ○ 개 요 • 위 치 : 중원구 성남동 2020번지 등 61필지 • 사 업 량 - 대지면적 : 4,992.5㎡(건축면적 3,936㎡, 연면적 8,180㎡) - 층 수 : 지하 1층, 지상 5층 - 주요시설 : 점포, 상인회사무실, 커뮤니티 문화센터, 주차장 • 사업기간 : 2012. ∼ 2020년 • 소요예산 : 60,100백만원 ○ 그간의 추진상황 • 2014. 6. 9. : 도시계획시설(시장, 도로) 결정 고시 • 2014. 12. 19. : 공유재산 관리계획 시의회 의결 • 2014. 12. 24. : 설계단계 건설사업관리용역 착수 • 2015. 6. 22. : 건립사업 위‧수탁 협약 체결(시↔성남도시개발공사) • 2015. 11. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수(용역사:CMP건축사사무소) • 2016. 3. 11. : 설계용역 일시중지(민간도시개발사업 실시계획인가 지연 등) ※ 2017.11.7. 성호시장지구 도시개발사업 실시계획인가(도시개발과) ○ 추진계획 • 2018. 1. ~ 11. : 실시설계 추진 및 행정절차 이행 • 2018.12. ~ 2019.4. : 토지보상 협의 추진 • 2019. 5. ~ 2020.5. : 공사 착공 및 준공