정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	재정경제국 시장현대화과 (2017 – 35)	담당자 (전화번호)	홍철의 (729-8964)
정책사업명	중앙공설시장 건립
선정기준	10억 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2013 ~ 2019
주요내용	○ 사업목적 • 재난위험시설인 중앙시장을 공설시장 및 주차장으로 재건축하여 재난위험을 해소하고 영세상인 보호와 지역경제 활성화를 도모코자 함 ○ 사업개요 • 위 치 : 수정구 태평동 3681번지 등 2필지 • 사 업 량 - 대지면적 : 3,411.41㎡(건축면적 2,871.78㎡, 연면적 21,490.86㎡) - 층 수 : 지하1, 지상7층 - 주요시설 : 점포, 창고, 주차장 • 사업기간 : 2013 ∼ 2019년 • 소요예산 : 44,820백만원 ○ 그간의 추진상황 • 2014. 7. 1. : 중앙시장 재도약 위한 업무협약 체결(시‧도‧중소기업청) • 2014. 10. 28. : 지방재정 중앙 투융자사업 심사 • 2014. 11. 4. : 도 시책추진보전금 교부(1,847백만원) • 2014. 12. 1. : 도시계획시설(주차장) 결정 고시 • 2014. 12. 19. : 공유재산 관리계획 시의회 의결 • 2015. 3. 16. : 설계단계 건설사업관리용역 착수 • 2015. 12. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수 • 2016. 11. 8. : 설계용역 MD계획 설명회 개최(MD계획안 결정) • 2016. 12. 21. : 설계용역 일시중지(설계 경제성 등 검토) • 2017. 3. 10. : 2017년 주차환경개산사업 대상 선정(국비 18,824백만원) • 2017. 3. 28. : 성남시 공공디자인소위원회 심의(조건부가결) • 2017. 3. 31. : 성남시 교통영향평가심의위원회 심의(수정의결) • 2017. 7. 6. : 건축협의(실시계획인가 포함) 완료 • 2017. 8. 16. : 기술자문위원회 심사(원안채택) • 2017. 9. 25. : 중앙공설시장 현대화사업 영업보상 계획 수립 • 2017. 12. 7. : 편입 지장물 및 손실 보상 계획(협의) 완료 • 2017. 12. 14. : 중앙공설시장 시설현대화사업 설명회 개최 ○ 추진계획 • 2017. 12. : 상인 이주 및 가림막 설치, 보상금 지급, 공사원가 사전검토 • 2018. 2. : 공사 계약 및 착공(지장물 철거) • 2019. 10. : 공사 준공