정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	평생학습원 도서관지원과 (2017 – 47)	담당자 (연락처)	윤부연 (729-4672)
정책사업명	서현도서관 건립
선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2009.1~2018. 9
주요내용	○ 위 치 : 분당구 서현동 234번지 ○ 사업기간 : 2009. 1. ∼ 2018. 9. ○ 사업규모 : 지하3층/지상4층(부지 4,222㎡, 연면적 12,559.41㎡) ○ 소요예산 : 30,532백만원 ○ 추진상황 • 2009. 01. 15 : 서현도서관 건립계획 수립 • 2009. 02. 24 : 공유재산관리계획 심의 의결(성남시의회) • 2009. 07. 20 : 주민설명회 개최(1차) • 2009. 08. 14 : 도서관 건립 타당성 조사용역 완료 • 2011. 03. 30 : 투융자사업 심사(경기도) • 2011. 04. 29 : 주민설명회 개최(2차) • 2013. 12. 02 : 도시관리계획 변경(주차장 폐지) 공람 공고(도시계획과) • 2014. 02. 05 : 도시관리계획 변경 결정(주차장 폐지)-도시계획위원회 • 2014. 07. 14 : 기본조사 및 실시설계용역 착수 • 2014. 09. 15 : 기본설계에 대한 사전설명회(시의원 3- 서현동 지역) • 2014. 12. 4. 경관 및 도시미관 심의 • 2014. 12. 31 : 설계 경제성 검토 등 설계VE용역 체결(24,791,000원) • 2015. 1. 8 : 경관 및 도시미관 재심의(시설공사과) • 2015. 1. 28 : 건축심의위원회 심의 • 2015. 4. 28 : 설계자문위원회 신청 • 2015. 5. 20 : 지방재정 중앙 투자사업 심사 조건부 승인 • 2015. 5. 27 : 굴토심의 • 2015. 6. 19 : 설계자문위원회 완료, 건축협의 신청 • 2015. 7. 30 : 계약심의 완료 • 2015. 9. 7 : 건축협의 완료 • 2015. 11. 19 : 계약심사 • 2015. 12. 28 : 기술검토 완료 • 2016. 3. 28 : 공사 계약심사 • 2016. 5. 10 : 공사 착공