정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	교통도로국 도로과 (2018 - 11)	② 담당자 (전화번호)	오재성 (729-3612)
③ 정책사업명	국지도57호선 우회도로(판교원마을) 소음저감시설 설치공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간		2014년 ~ 2019년
⑥ 주요내용	○ 추진배경 • 국지도 57호선 우회도로 판교원마을 주변 교통소음 대책을 요구하는 민원이 장기적으로 발생되어 소음저감시설을 설치하여 민원을 해소 ○ 위 치 : 국지도57호선 우회도로 판교원마을 3,4,5단지 인근 ○ 사 업 량 : 방음터널 L=583m ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년 ○ 소요예산 : 33,153백만원 ○ 추진경과 • 2010.08. ~ : 소음저감대책요구 민원 수시 제기 • 2013.07. 18. : 국민권익위 중재로 조정 합의(성남시, LH, 주민대표) • 2013.09. 27. : 사업비 분담 등 협약 체결(성남시⇔LH) • 2014.07. 11. : 타당성조사 용역 완료 • 2016.12. 22. : 기본 및 실시설계 용역 완료 • 2017.07. 31. : 공사착공 • 2018.12.11. : 공정율 56% ○ 향후 추진계획 • 2019. 08. 17. : 공사 준공 예정