정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	맑은물관리사업소 수질복원과 (2018 - 14)	② 담당자 (전화번호)	김 시 왕 (729-4183)
③ 정책사업명	하수관로 정비사업(3단계)
④ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑤ 사업기간	2018. 6 ~ 2022.12
⑥ 주요내용	○ 추진배경 ∙ 2017년 실시한 20년 이상 노후하수관로 정밀조사 결과 정비가 시급한 구간의 하수관로 정비로 기능개선 및 효율적 유지관리 ○ 사업개요 ∙ 위 치 : 성남시 관내 ∙ 사 업 명 : 하수관로 정비사업(3단계) ∙ 사 업 량 : 노후하수관로 정비 L=33.4km ∙ 사업기간 : 2018. 6 ~ 2022.12 ∙ 소요예산 : 47,310백만원(국비 23,655, 시비 23,655) ○ 추진상황 ∙ 2016. 6. 16 ~ 2017. 9. 14 : 노후 하수관로 정밀조사 시행 ∙ 2017. 10. 30 : 「하수관로 정비사업(3단계)」추진계획 보고 ∙ 2018. 2. 21 : 설계용역 시행계획 보고 ∙ 2018. 3. 10 : 국고보조금 예산신청(환경부) ∙ 2018. 5. 25 : 설계 용역업체 사업수행능력평가(PQ) ∙ 2018. 6. 25 : 용역 착수 ○ 향후계획 ∙ 2018. 6월 ~ 2019. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 시행 ∙ 2019. 8월 ~ 2022. 12월 : 사업 시행