정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서

회계과

(2018 - 17)

② 담당자

(전화번호)

회계과장 류진열

담 당 자 김정숙

(031-729-2775)

③ 정책사업명

구 청사 및 행정복지센터 신축

④ 선정기준

노후·협소한 공공청사 신축

⑤ 사업기간

2013 ~ 지속

⑥ 주요내용

○ 추진배경

노후하고 협소한 청사를 신축하여 지역 주민에게 양질의 행정서비스를 제공하고자 함

○ 사 업 량 : 10개소

○ 소요예산 : 246,128백만원

구 분	대지 면적	층수	연면적	사업 기간	사업비	추진현황 및 계획
태평4동	3,040	지하2 지상5	9,290	2013 ~ 2019	23,484	·‛14. 7. ~ ‛16. 9. : 설 계 ·‛16. 12. ~ ‛19. 2. : 공 사
성남동 별 관		지하1 지상4	482	2016 ~ 2018	1,625	·‛17. 2. ~ ‛18. 1. : 설 계 ·‛18. 3. ~ ‛18. 12. : 공 사
위례동 (업무10)	1,810	지하2 지상4	5,200	2014 ~ 2019	21,653	·‛16. 5. ~ ‛18. 1. : 설 계 ·‛18. 4. ~ ‛19. 10. : 공 사
분당동	1,458	지하2 지상3	3,815	2013 ~ 2021	10,931	·‛16. 1. ~ ‛18. 12. : 설 계 ·‛19. 3. ~ ‛21. 1. : 공 사
수내2동	750	지하2 지상3	2,300	2013 ~ 2021	5,798	·‛18. 12. ~ ‛19. 12. : 설 계 ·‛20.상반기 ~ ‛21.하반기 : 공 사
고등동	2,000	지하1 지상3	3,500	2016 ~ 2021	14,350	·‛18. 하반기 ~ ‛19. 하반기 : 설 계 ·‛19. 상반기 ~ ‛20. 하반기 : 토지매입 ·‛19. 하반기 ~ ‛21. 상반기 : 공 사
신흥2동	1,050	지하1지상4	2,900	2017 ~ 2021	10,758	·‛18. 하반기 ~ ‛19. 하반기 : 설 계 ·‛19. 상반기 ~ ‛20. 하반기 : 토지매입 ·‛20. 상반기 ~ ‛21. 하반기 : 공 사
정자1동	994	지하4 지상6	7,500	2016 ~ 2022	19,534	·‛18. 하반기 ~ ‛20. 상반기 : 설 계 ·‛20. 상반기 ~ ‛22. 상반기 : 공 사
이매1동	6,173	지하2 지상5	9,500	2015 ~ 2023	29,826	·‛19. : 사업부지매입 ·‛19. 하반기 ~ ‛20. 하반기 : 설 계 ·‛21. 상반기 ~ ‛23. 상반기 : 공 사
중원구 복합청사	7,587	미정	미정	2016 ~ 2023	108,169	·‛19. : 타당성조사, 투자심사 ·‛19. 하반기 ~ ‛21. 상반기 : 설계용역 ·‛21. 하반기 ~ ‛23. 하반기 : 공 사

○ 현    황                                   (단위 : ㎡, 백만원)