정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

사업부서	복지보건국 사회복지과 (2018 – 19)	담당자 (전화번호)	허지윤 (729-2832)
정책사업명	태평종합사회복지관 건립공사
선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2013.10 ~ 2022.11
주요내용	○ 추진배경 • 태평2동 일원 취약계층이 밀집한 태평동지역 주민들의 삶의 질 향상 및 복지수요 충족을 위한 종합사회복지관을 건립하여 지역주민의 복지 증진에 기여하고자 건립 ○ 추진기간 : 2013. 10. ~ 2022. 11. ○ 총사업비 : 20,900,000천원 ○ 주요내용 - 위 치 : 수정구 태평2동 2886번지 일원 - 사 업 량 : 지하 2층, 지상3층 (부지면적 2,388.4㎡, 시유지 1,788.6㎡, 사유지 597.1㎡) ○ 추진상황 • 2013.10. : 건립계획 검토 방침 보고 • 2013.11. : 주민의견 수렴(인근지역 주민설명회 개최) • 2014.10. : 매입예정 건축주 개별면담 실시 • 2015.12. : 매입예정 사유지 감정평가 완료(4필지 4개동) • 2016. 9. : 공유재산관리계획 승인 • 2016.11. : 중기지방재정계획 승인 • 2017. 2. : 경기도 투융자심사 승인 • 2017. 7. : 감정평가 완료 • 2017. 7. ~ 2018. 12 : 사유지 매입 추진 • 2018. 2. : 도시관리계획 사회복지시설 결정 용역 착공 • 2018. 5. : 도시관리계획 사회복지시설 결정 용역 준공 • 2018.11. : 도시관리계획 사회복지시설 결정 ○ 향후계획 • 2019. 3. : 기본 및 실시설계 착공 • 2020. 3. : 기본 및 실시설계 준공 • 2020. 5. : 공사 착공 • 2022. 5. : 공사 준공 • 2022. 5. ~ 2022. 11. : 프로그램실 인테리어 공사 및 개관 ○ 기대효과 • 지역특성에 맞는 전문적인 복지서비스 제공으로 지역주민의 복지증진 • 다양한 복지프로그램 제공으로 구시가지 복지수준 향상