정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	교육문화체육국 교육청소년과 (2018 - 30)	② 담당자 (전화번호)	과 장 임형곤 시설8급 장우재 (729-3033)
③ 정책사업명	야탑청소년수련관 건립
④ 선정기준	10억이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2013. 4 ~ 2019. 9.
⑥ 주요내용	○ 추진배경 : 야탑·이매·도촌 일원의 청소년들에게 다양하고 쾌적한 문화체험 공간을 제공하여 건전한 청소년 문화를 육성 ○ 총사업비 : 44,350백만원 ○ 주요내용 • 사업위치 : 성남시 분당구 야탑동 262번지 • 사 업 량 - 대지면적 : 4,040.3㎡(시유지) - 연 면 적 : 14,258.5㎡(지하 2층, 지상 6층) - 주요시설 : 수영장, 공연장, 다목적체육관, 도서관 등 ○ 추진상황 • 2013. 4. 11 : 야탑청소년수련관 건립(변경)계획 수립 • 2013. 12. 26 : 기본 및 실시설계용역 계약(용역비:900,345천원) 및 착수 • 2014. 12. 23 : 기본 및 실시설계용역 중간설계 완료 - 도면, 내역서,(외·내부) 색채계획서, 지반조사 및 측량보고서, 조감도 등 • 2015. 07. 16 : (실시설계)설계자문위원회 심의 완료 • 2015. 09. 14 : 투자 (재)심사 요청 • 2015. 11. 10 : 투자심사위원회 개최(심사결과 : 적정) • 2016. 03. 29. : 계약심사 완료 • 2017. 07. : 공사 및 감리용역 계약 및 착공 ○ 추진실적 : 공정율 44.07%(3층 골조공사중) ○ 향후계획 • 2019. 9. : 공사준공