정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2018 - 36

담당부서

작성자

(교육문화체육국 / 체육진흥과)

(박 성 하 / 3052)

정 책 명

성남 종합스포츠센터 건립공사(완료)

사업개요

○ 추진배경

- 운영의 효율성이 떨어지는 노후된 인라인 스케이트장 부지에    종합스포츠센터를 건립하여 기존・신시가지의 체육시설 균형    발전과 엘리트 생활체육의 활성화 및 체육발전 기대

○ 추진기간 : 2010. 6. ~ 2018. 12.

○ 총사업비 : 79,170백만원

○ 사업규모

- 지하3층/지상7층 (연면적 33,471.92㎡)

- 체육시설 : 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 골프연습장,

인공암벽장, 라켓볼장, 에어로빅장 등

- 기타시설 : 문화교실, 사무실, 직장운동부 숙소, 회의실 등

추진경과 및 사업 관련자

□ 추진경과

○ 2007.  5. 14. : 복합체육회관 건립공사 계획수립

○ 2009.  1.  3. : 타당성 조사 용역 완료

○ 2009. 10. 20. : 지방재정 투・융자 심사

○ 2010.  6. 24. ~ 2012. 2. 20. : 기본 및 실시설계

○ 2012.  1. 25. : 도시계획시설 실시계획인가

○ 2012. 12. 20. : 공사 착공

○ 2016. 12. 28. : 건축공사 준공

○ 2017.  5.  1. : 시설 개장

○ 2017.  9. 18. : 도시계획시설(운동장) 조성계획 변경 및

실시계획변경 인가

○ 2017. 10. 23 : 교통개선공사 계약심사(경기도)

○ 2017. 12.  4 : 건축물 표시변경 신청

○ 2017. 12. 12 : 교통개선공사 실시설계용역 완료

○ 2018.  3.  5 : 성남종합스포츠센터 교통개선공사 착공

○ 2018.  7. 20. : 성남종합스포츠센터 교통개선공사 준공

○ 2018. 10. 11. : 성남종합스포츠센터 교통개선공사(조경) 착공

○ 2018. 12.  5. : 성남종합스포츠센터 교통개선공사(조경) 준공

□ 사업관련자 현황

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	임승민	4급	2018.03.02. ~ 2018.12.05.	국 업무총괄
〃	박창훈	3급	2016.11.01. ~ 2018.03.01.
〃	이정도	퇴직	2016.05.02. ~ 2016.10.31.
〃	권석필	퇴직	2013.05.02. ~ 2016.05.01.
과장	오재곤	행정5급	2018.01.01. ~ 2018.12.05.	과 업무 총괄
〃	이남석	행정5급	2017.07.10. ~ 2017.12.31.
〃	임형곤	행정5급	2015.11.02. ~ 2017.07.09.
〃	김옥인	4급	2013.05.01. ~ 2015.11.01.
〃	전형수	퇴직	2012.05.02. ~ 2013.04.30.
〃	김원발	퇴직	2011.05.02. ~ 2012.05.01.
〃	송영수	퇴직	2009.01.15. ~ 2011.05.01.	팀 업무 총괄
팀장	조태현	시설6급	2013.11.04. ~ 2018.12.05.
〃	강해구	시설5급	2012.05.02. ~ 2013.11.03.
〃	진명래	시설5급	2010.07.19 ~ 2012.05.01.
〃	김태형	시설5급	2009.01.15 ~ 2010.07.18.
담당	박성하	시설7급	2018.07.18. ~ 2018.12.05.	사업추진
〃	이기남	시설7급	2017.07.11. ~ 2018.07.17.
〃	이대원	시설6급	2014.07.01 ~ 2017.07.10.
〃	최현숙	시설7급	2012.01.02. ~ 2014.06.30.
〃	김혜열	시설6급	2011.05.02. ~ 2012.01.01.
〃	김조래	시설6급	2010.08.20. ~ 2011.05.01.
〃	구명만	시설6급	2009.01.15. ~ 2010.08.19.

○ 성남종합스포츠센터 건립공사

- 기본 및 실시설계 용역 : ㈜예인컨설턴트건춧사사무소 대표 조 광 현

- 전면책임감리용역 : ㈜무영씨엠건축사사무소 대표 박 성 근

- 건축공사 : ㈜대아건설 대표 최 홍 호

- 전기공사 : ㈜대동전기 대표 전 상 선

- 통신공사 : 화인정보통신(주) 대표 신 용 운

- 소방공사 : 성우종합건설(주) 대표 전 승 재

○ 성남종합스포츠센터 교통개선공사

- 실시설계 용역 : 벽산엔지니어링(주) 대표 김 동 운

- 교통개선공사 : 승용건설(주) 대표 정 승 기

- 교통개선공사(전기) : ㈜산천개발종합전기 대표 이 형 림

- 교통개선공사(통신) : ㈜포인컴 대표 홍 정 아

- 교통개선공사(조경) : ㈜건림원 대표 윤 오 임