정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	체육진흥과 (2018 - 37)	② 담당자 (전화번호)	체육진흥과장 오 재 곤(2450), 지방시설주사보 박 성 하(3052)
③ 정책사업명	성남축구센터(클럽하우스) 조성공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2016. 12. ~ 2020. 6.
⑥ 주요내용	○ 추진배경 • 성남FC의 안정적인 훈련환경을 조성하여 경기력을 향상시키고 시민과 하나되는 명문구단으로의 도약을 위해 성남축구센터 조성 ○ 위 치 : 분당구 정자동 4-12번지 외 1필지(잡월드 잔여부지) ○ 추진기간 : 2016. 12. ∼ 2020. 6. ○ 총사업비 : 26,000백만원 ○ 사업규모 : 지하1층 / 지상3층(연면적 7.304.09㎡) ○ 사 업 량 : 천연잔디구장 2면, 클럽하우스 1동 • 선수 관련시설 : 라커룸, 라운지, 숙소, 물리치료실, 체력단련실, 감독/ 코치실, 전력분석회의실, 식당, 샤워실, 실내연습장 등 • 구단 및 팬 관련시설 : 구단사무실, 회의실, 관람시설, 라운지 등 • 유지관리시설 : 관리실, 기계/설비/전기실, 창고 등 ○ 추진상황 • 2015. 9. : 도시관리계획 결정(체육시설) • 2015. 11. : 중기지방재정 및 지방재정 투자심사 • 2015. 12. : 잡월드 잔여부지 사용 동의(고용노동부) • 2016. 11. : 기본 및 실시설계 착수 • 2017. 10. : 성남시 기술자문위원회 심의 • 2017. 11. : 공공디자인진흥위원회 심의 및 BF인증제도 심의(예비), 지방재정 투자심사 재심사(190억 → 260억 증액) • 2018. 2. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경), 부지653.1㎡ 추가확보 • 2018. 5. : 소규모 환경영향평가 협의 및 경부고속도로 도로구역 조정 협의 완료 • 2018. 7. : 도시계획시설 실시계획인가 및 건축협의 신청 • 2018. 9. : 건축협의 등 행정절차 완료 • 2018. 10. ~ 11. : 계약심사 및 공사발주 ○ 향후계획 • 2019. 3. ~ 2020. 6. : 공사 착공 및 준공 • 2020. 7. : 시설 개장