정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

사업부서	환경보건국 청소행정과 (2018 – 39)	담당자 (전화번호)	청소행정과장 박동화 공업6급 하홍열 (729-3232)
정책사업명	자원순환센터 건립
선정기준	10억 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2013 ~ 2022 2019. 6. 물순환과 사업 (성남 환경기초시설 통합 현대화)과 통합하여 추진 계획으로 사업 취소
주요내용	○ 추진배경 • 재활용 선별장 및 음식물자원화 시설의 노후화와 시설규모 대비 처리용량 초과로 시설의 안정적 운영과 폐기물의 적정처리 곤란 • 환경기준 강화에 대비한 최적화 시설의 자원순환센터를 건립하여 온실가스 감축 및 자원순환형 폐기물 처리정책 기여 ○ 개 요 • 위 치 : 성남시 수정구 탄천로 687(폐기물종합처리장) • 면 적 : 53,979㎡ • 조성대상 : 폐기물종합처리장, 집단자원화사업장 ⇒ 자원순환센터 • 사업기간 : 2013. 6. ∼ 2022. 7. • 총사업비 : 95,971백만원(타당성 용역결과에 따른 추정사업비) • 시설용량 - 음식물류 : 230톤/일 ⇒ 300톤/일(2개소 → 1개소) - 재 활 용 : 50톤/일 ⇒ 60톤/일(재활용+대형→재활용) - 대형파쇄 : 25톤/일 ⇒ 40톤/일 ○ 그동안 추진사항 • 2013. 06. : 폐기물처리시설 현대화 타당성조사 용역 착수 • 2013. 12. : 폐기물처리시설 현대화 타당성조사 용역 준공 • 2014. 08. : 자원순환센터 건립 기본계획 수립 • 2014. 10. : 공유재산계획 및 중기지방재정계획 반영 • 2014. 12. : 폐기물처리시설 광역화 협의(환경부 ․ 용인시)

주요내용	• 2015. 04. : 자원순환센터 건립 추진일정 변경 (사유 : 태평동 음식물자원화사업장 기술진단 실시) • 2015. 11. : 음식물자원화사업장 기술진단 착수(한국환경공단) • 2016. 04. : 음식물자원화사업장 기술진단 준공 • 2016. 12. : 국고지원 관련 업무협의(환경부) • 2017. 01. : 자원순환센터 추진현황 보고 (재정사업→민간투자사업) (국내 도입단계의 혐기성소화방식에 대해 충분한 검증 필요) • 2017. 04. : 국내 혐기성소화방식 운영실태 조사 (대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 충주시) • 2017. 06. : 자원순환센터건립 추진상황 보고(시의회) • 2017. 08. : 고양시 혐기성소화시설 운영실태 조사 • 2017. 09. : 송파구 혐기성소화시설 운영실태 조사 • 2017. 10. : 동대문구 혐기성소화시설 운영실태 조사 • 2017. 12. : 충주시 혐기성소화시설 운영실태 조사 • 2017. 12. : 수원시 사료화 및 퇴비화시설 운영실태 조사 • 2017. 12. : 자원순환센터 도비지원 여부 질의(성남시) • 2017. 12. : 자원순환센터 도비지원 질의회신(경기도) • 2018. 01. : 자원순환센터 추진상황 시의회(경제환경위원회)보고 • 2018. 01. : 서대문구 사료화시설 운영실태 조사 • 2018. 03. : 의정부시 혐기성소화시설 운영실태 조사 • 2018. 04. : 안양시 혐기성소화시설 운영실태 조사 • 2018. 09. : 국내 음식물자원화시설 운영실태 조사 (대전광역시, 충주시, 하남시) • 2018. 09. : 하수처리장과 자원순환센터 복합 건립 검토 • 2018. 11. : 복합 건립 검토 1차회의 • 2018. 12. : 복합 건립 검토 2차회의