정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	교통도로국 교통기획과 (2018 - 44)	② 담당자 (전화번호)	과장 : 김동찬 담당 : 정기성 (031-729-8592)
③ 정책사업명	운중동 934번지 공영주차장 건립공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2017.06. ~ 2022.01
⑥ 주요내용	○ 추진배경 • 판교택지개발사업지구내 주차장 부지에 공영주차장을 건립하여 인근 주택가 주차난해소 및 교통소통에 기여하고자 함. ○ 위 치 : 분당구 운중동 934번지(운중동 주민센터 일원) ○ 부지면적 : 1,696㎡ ○ 사 업 량 : 주차면수 208면(지하2층/지상4층) ○ 사업기간 : 2017.06 ~ 2022.01 ○ 소요예산 : 16,500백만원 ○ 추진상황 • 2014.08.12. : 판교여수지구 공영주차장 부지매입 계획 수립(방침) • 2016.11.08. : 중기지방재정계획 수립(반영) • 2016.11.11. : 투자심사(적정) • 2017.06.21. : 기본 및 실시설계용역 착수 • 2018.09.15. : 운중동 934번지 공영주차장 건립 검토 보고 • 2018.11.05. : 경관위원회 및 공공디자인 진흥위원회 개최 • 2018.11.19. : 투자심사(재심사-적정) • 2018.12.14. : 공영주차장 경관(디자인) 주민의견수렴 ○ 추진계획 • 2019.08월 : 설계용역 준공 • 2019.09월 : 감리용역 발주 • 2019.10월 : 공사발주 • 2022.01월 : 공사준공