정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	체육진흥과 (2018 - 05)	② 담당자 (전화번호)	체육진흥과장 오 재 곤(2450), 지방시설주사보 박 성 하(3052)
③ 정책사업명	성남국민체육센터 건립공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2010. 2. ~ 2019. 10.
⑥ 주요내용	○ 추진배경 • 부족한 공공체육시설을 확충하고 시민들의 다양한 스포츠 활동욕구를 위하여 황새울공원 내 국민체육센터를 건립하여 시민건강 증진에 기여 ○ 위 치 : 분당구 수내동 43번지(황새울공원 내) ○ 추진기간 : 2010. 2. ∼ 2019. 10. ○ 총사업비 : 24,761백만원 ○ 사업규모 : 지하1층 / 지상2층(연면적 9,119.59㎡) • 지하1층 : 주차장(95대), 기계실, 전기실, 발전기실 등 • 지상1층 : 수영장(25m×7레인), 샤워실, 강사․의무실, 실내게이트볼장(15×20m, 2면) 등 • 지상2층 : 다목적체육관(23.8×35m), 헬스장, 에어로빅실, 카페테리아, 사무실 등 ○ 추진상황 • 2009. 1. : 성남국민체육센터 건립계획 수립 • 2009. 4. : 국민체육센터 건립협약 체결(지원금 27억원) • 2009. 11. : 국민체육진흥기금 1차 교부금 입금(10억원) • 2012. 1. : 기본 및 실시설계 완료 • 2012. 2. : 도시계획시설(공원) 실시계획(변경)인가 및 건축협의 • 2015. 3. : 지방재정 투ㆍ융자 재심사(경기도) • 2016. 12. : 국민체육진흥기금 2차 교부금 입금(17억원) • 2017. 4. ~ 7. : 설계내역 변경 용역 • 2017. 12. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 • 2018. 3. : 공사 착공(현 공정률 25%) ○ 향후계획 • 2019. 10. : 공사 준공 • 2019. 12. : 시설 개장